서울대학교 인문대 5, 6, 7동 증축사업 설계공모 지침서

설계공모지침서 「서울대학교 인문대 5, 6, 7동 증축 사업」

2024. 04.

서울대학교

설계공모 규정

설계공모개요

설계공모 명칭

서울대학교 인문대 5, 6, 7동 증축사업

설계공모 목적

교육과 연구 수요에 상응하는 공간 및 시설 확충

- 시대 변화에 따른 인문학 각 전공 분야의 교육 효과 및 연구 역량 강화를 위해서 교육 및 연구공간 증축이 시급

- 단과대학 도서관, 다양한 교육 연구 활동을 위한 공동 학습실 등과 같은 공용 시설이 절대적으로 부족하며, 대학원생 연구공간 역시 매우 부족한 상황

새로운 연구분야 개척 및 교육공간 현대화

- 학생들의 교육 사이클(cycle)을 배려한 공간, 융복합 연구를 위한 실험 실습 공간 등 교육과 연구를 위한 새로운 연구 분야 개척을 위해서도 건물의 증축이 절실히 요구되고 있음

인문학연구원 통합으로 연구효율 극대화

- 인문학연구원이 공간부족으로 대림국제관(137-2동)에 분산되어 효율적 운영 어려움, 인문대학으로 이전을 위한 공간 필요

설계공모 개요

❙표 설계공모 개요

구   분

내   용

사업명칭

인문대 5, 6, 7동 증축사업

대지위치

서울대학교 관악캠퍼스 현 5, 6, 7동

공모

사업

범위

주요용도

교육연구시설

연 면 적

구 분	기존(사업 전)	증개축(사업 후)	증 감	비 고
5동	5,181㎡ 지상4층	6,471㎡ 지상5층	1,290㎡ 지상1층
6동	3,107㎡ 지상4층	3,852㎡ 지상5층	745㎡ 지상1층	251동 포함 (6~7동연결통로)
7동	4,765㎡ 지상4층	5,955㎡ 지상5층	1,190㎡ 지상1층
소계	13,053㎡ (지상4층)	16,278㎡ (지상5층)	3,225㎡ (1개층)

층    수

각 동 5층(기존 지상4층) 중 최상층 1개층 증축

예정 사업비

16,420,000,000원 (부가세 포함, 내진보강, 유틸이티 이전 비용 포함)

예정 설계비

572,667,000원

예정 설계기간

착수일로부터 270일(공휴일 포함)

※ 2024년 11월까지 실시설계 70% 수준의 도서(수량산출서, 내역서, 계산서를 제외한 모든 도서) 작성하여 환경보전방안 협의용 도서 작성에 협조해야함.

예정 공사비

13,358,640,000원

(부가세 포함, 내진보강 1,370,565,000원, 유틸리티 이전 3,000,000,000원 포함)

※ 기존건물 준공년도: 1974년(5동-2011년 리모델링, 6동-2012년 리모델링, 7동-2020년 리모델링)

※ 사업규모(연면적, 공사비, 설계용역비 등)는 발주기관의 사정에 따라 변경될 수 있음.

※ 추정 공사비는 건축, 기계, 전기, 통신, 소방, 내진보강, 유틸리티 이전비, 부가세 등 포함

※ 예정 설계비는 계획설계, 기본 및 실시 설계비, BF 예비인증, 손해배상 공제 보험료, 부가세 등 포함

(설계업무대가: 508,837,000원/ 에너지절약계획서 작성: 2,500,000원/ BF 예비인증: 8,000,000원/ 손해배상보험료: 1,397,000원/ 부가세: 51,933,000원))

※ 주차계획은 본 공모(안)의 작성에서는 제외되나 당선작으로 선정되면 인허가 과정에서 주변의 주차면 등을 활용한 주차장 확보 계획을 수립 해야함.(학교 전체부지의 주차면 현황 등 필요자료는 발주처에서 제공)

※ 학사 일정을 고려하여 2025년 6월 공사 착공을 해야하며, 관련하여 본 용역은 2024년 11월까지 실시설계 70% 수준의 도서를 작성하여 서울시 환경보전방안협의용 도서 제출에 협조 해야함.

◦ 공모 홈페이지 : https://designcampus.snu.ac.kr

※ 참가등록 후, 등록 된 이메일로 변경 사항에 관련된 공지가 진행되나, 공식 공지사항은 홈페이지를 확인하여야 한다.

※ 참가자는 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 홈페이지를 확인하지 않아 발생하는 불이익은 주관기관에 이의를 제기할 수 없다.

공모일정 및 방법

설계공모 방식 : 일반설계공모

「건축서비스산업 진흥법」 제21조, 「건축서비스산업 진흥법 시행령」 제17조 및 「건축 설계공모 운영지침」 (국토교통부 고시 제2023-180호, 2023. 03. 30.)에 따름.

설계공모 일정

❙표 설계공모 일정

구 분	일 시	유의사항
공 고	‘24. 04. 30.(화)	홈페이지 공고
참가등록	‘24. 04. 30.(화) ~ 06. 14.(금) 16:00까지	홈페이지를 통한 신청
현장설명회	‘24. 05. 09.(목)	홈페이지 공고
질의접수	‘24. 05. 09.(목) ~ 05. 13.(월) 16:00까지	홈페이지를 통해 접수
질의회신	‘24. 05. 17.(금)	홈페이지에 일괄 게재
작품접수	‘24. 06. 28.(금) 10:00 ~ 16:00까지	홈페이지를 통해 제출 (60일)
기술검토	‘24. 07. 03.(수)	지침 및 법규 위반 검토
작품심사	‘24. 07. 04.(목)	도판 심사
심사결과 발표	‘24. 07. 09.(화)(예정)

※ 지침서의 모든 시간 표기는 한국 표준시(UTC/GMT+9) 기준으로 발주기관의 사정에 따라 일부 조정될 수 있으며, 일정을 조정하거나 변경하는 경우 설계공모 홈페이지(https://designcampus.snu.ac.kr)에 이를 공지한다.

참가자격

공고일 현재 「건축사법」 제7조에 따른 건축사 면허를 소지하고, 같은 법 제23조에 따라 건축사사무소 등록을 마친 자, 회사(업체) 간 공동이행방식에 의한 공동응모 가능자로서 관계 법령에 의한 결격사유가 없는 자여야 한다.

공동이행방식(주관 외 1인까지)으로 참여하는 경우, 대표자는 위의 자격 조건을 갖추어야 하며, 공동참가자 및 회사(업체)도 동일한 자격 조건을 갖추어야 한다.
다만, ‘외국 건축사 면허·자격을 취득한 자’는 상기 1)항의 건축사사무소 개설자와 공동이행 방식으로 참여 가능하며, 이 경우 국내 건축사가 대표자가 되어야 하며 대표자에게 본 설계공모와 관련하여 수반되는 모든 법적 권리 및 책임, 의무사항이 귀속된다.

본 공모의 심사위원, 운영위원, 기술검토위원과 그가 속한 업체 및 직원 등은 참가할 수 없으며, 설계관리 용역에 참가한 연구진과 연구진이 속한 업체는 참가할 수 없다.

공고일 기준으로 휴·폐업, 부정당업체 지정, 영업(업무)정지, 등록취소 등 결격사유가 있는 자 이거나 이에 준하는 행정처분을 받고 그 처분기간 중에 있는 자는 참가할 수 없다.

1개 업체가 2개 이상 중복 응모하는 것과 단독으로 응모 신청 후 공동으로 응모하는 것은 불가하며 중복 응모 시 해당 업체에 대해서는 참가자격을 박탈한다.

설계 공모 당선자는 기본 및 실시설계 용역 완료 시까지 기계, 전기, 소방, 통신, 토목 분야를 포함하여 설계하여야 하며, 특히 전기, 소방, 정보통신의 해당 분야 설계자격이 없는 경우 분야별 설계적격자와 공동도급(분담이행방식) 계약을 체결하여야 한다. 이 경우 공동도급의 대표자는 설계공모 당선자가 된다. 그 밖의 계약에 관한 사항은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 의한다.

「전력기술관리법」 제14조에 의한 설계업(전문설계1종) 또는 설계업(종합설계)을 등록한 업체 또는 기술사법 제6조에 의한 기술사사무소(건축전기설비)를 개설 등록한 업체

「소방시설공사업법」 제4조에 의한 일반소방시설설계업(기계, 전기) 또는 전문소방시설 설계업 등록을 마친 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조 규정에 의한 엔지니어링사업자(정보통신) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소 [정보통신처리분야 (정보통신)]를 등록한 업체

「엔지니어링산업 진흥법」 제21조에 의한 엔지니어링사업(토목) 신고를 마친 업체 또는 기술사법 제6조의 규정에 의한 기술사사무소(토목)를 등록한 업체

참가등록

등록기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

참가등록 방법 : 홈페이지를 통해 구비서류를 제출한후, 24시간 이내 (주말 및 공휴일 제외) 서류 확인후 참가 신청 완료

홈페이지 : 서울대학교 공모 홈페이지(http://designcampus.snu.ac.kr)
이때 부여하는 고유식별 번호를 통해 공모기간 동안 참가자와 제출 자료를 식별한다.

제출서류(스캔)

❙표3 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	건축 설계공모 참가등록 신청서	서식 1
2	대표자 선임계(해당 시)	서식 2
3	공동응모협정서(해당 시)	서식 3
4	사전접촉 등 불공정행위 금지서약서	서식 4
5	청렴서약서	서식 5
6	서약서	서식 6
7	보안각서	서식 7
8	국외 건축사자격증 사본(외국건축사 참여할 경우에 한함)
9	개인정보 수집·이용 동의서	서식 8
10	심사위원 기피신청서 ※ 「건축 설계공모 운영지침」제12조 참조	서식 9

모든 제출서류는 사본을 제출할 경우, ‘사실과 상위없음’ 및 업체등록인감 날인

제출서류는 서식 번호 순서대로 정렬하여 PDF 파일로 온라인 제출

설계공모에 응모하는 회사는 단독 또는 공동응모 중 1가지의 방식으로만 참여 가능하며, 접수 후 공동응모 참가자의 변경이 생길 경우 접수기간 내에 철회 후 재접수 가능

유의사항

등록기간 내 참가자의 정보 변경은 가능하나, 참가 등록 기간 이후에는 어떠한 수정도 할 수 없다.

참가등록 후 참가자는 설계공모 홈페이지를 정기적으로 방문하여 공지사항 등을 확인하여야 하며, 참가자가 공지사항을 확인하지 않아 발생한 불이익은 그 책임이 참가자에게 있다.

현장설명회

일시 및 장소는 홈페이지 공지를 확인한다.

현장설명회 참가가 설계공모 참가자격 필수 요건은 아니나, 현장여건 등을 파악하고 제안할 수 있도록 설계공모 참가희망자는 본 설명회에 가급적 참석하여야 한다.

질의접수 및 회신

질의기간 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

질의등록방법 : 공모 홈페이지 지정 질의게시판을 통해 질의 할 수 있다.

참가등록을 완료한 팀에 한해서 질의 제출 가능

질의에 대한 답변은 모든 참가자가 볼 수 있도록 공모 홈페이지를 통해 제공할 예정이며,
일정 변경 시 설계공모 홈페이지 공지사항에 공지한다.

유의사항

질의사항에 대한 답변내용은 설계공모 지침서를 추가 또는 수정한 것으로 간주하며, 질의답변 미열람에 대한 책임은 참가자에게 있다.

접수된 질의서의 내용이 설계공모 지침과 직접 관련이 없는 사항일 경우에는 답변하지 않는다.

이메일 및 전화를 통한 개별 질의는 받지 않는다.

제공자료

본 공모를 위해 필요한 자료는 홈페이지를 통해 제공한다.

제공 도서 및 자료의 일부 또는 전부는 본 설계공모 외 다른 목적으로 사용할 수 없다.

제공된 자료는 참가자의 편의를 위한 참고용 자료로 일치 확인 책임은 참가자에게 있다.

공식 언어 및 계량 단위

설계공모와 관련된 공식 언어는 ‘한국어’로 한다. 단, 설계안을 표현하기 위해 필요한 일부 내용은 영어나 한자 표기가 가능하다.

모든 계량 단위는 ‘미터법’을 사용한다.

공모안의 제출 및 작성

공모안 제출

제출일시 : ‘2.2 설계공모 일정’ 참조

제출방법 : 서울대학교 공모 홈페이지(https://designcampus.snu.ac.kr)를 통해 온라인 제출만 가능

제출도서 및 서류

❙표4 제출도서 및 서류

	세부사항	서식목록
1	설계공모 응모작품 제출서	서식 10
2	설계도판 (A1 2매)
3	설계설명서(A4 세로)	서식 11
4	건축사사무소 신고필증 사본 1부
5	사업자등록증 사본

유의사항

방문, 우편, 팩스 등 접수 불가

규정된 제출도서 목록 이외의 추가 도서류 및 모형 등은 제출 불가

작품 작성요령 및 제출 방법에 명기한 내용 외에 모든 제출물에 참가자임을 인지할 수 있는 표시할 수 없으며, 표시가 발견될 경우에는 설계공모 심사위원회(이하 “심사위원회”)에 상정하여 심사대상에서 제외할 수 있다.

익명의 원칙은 심사위원회의 최종 결정 시까지 설계공모 전체 기간 동안 적용한다.

설계공모 홈페이지에 등록한 정보와 모든 제출물은 설계공모 전체 기간(당선작 발표시 까지) 동안 익명을 유지해야 하며, SNS 등 매체를 통해 제출안을 절대 공개하지 않는다.

설계설명서의 규격, 쪽수, 작성방법 등 제한사항을 위반하였을 경우에는 사전 검토 시 해당 내용에 따라 감점 대상이 된다.

고유번호(PIN) 기재방법

공모 참가후 부여받은 고유번호(Pin)는 추후 공지 및 안내시 익명을 위해 사용된다.

설계공모 응모작품 제출서에 부여받은 고유번호(Pin)를 기입하여야 한다.

고유번호는 참가등록시 설계공모 홈페이지 시스템에 의해서 무작위로 부여되므로, 변경이 불가하다.

공모안의 작성

공통사항

모든 제출도서의 기본 표기는 한글(일부 알파벳 · 한자 허용)로 하고, 숫자는 아라비아 숫자로 한다.

방위 및 축척은 각 도면에 정확히 표기한다.
(규정된 축척이 없을 시 임의로 정하되, 같은 유형의 도면끼리는 통일)

컬러는 도면, 조감도, 투시도, 개념도, 다이어그램 등에 자유롭게 표현이 가능하다.

조감도 및 투시도는 3D프로그램은 사용가능하나 설계안을 심하게 왜곡하거나 도면으로 표시된 형태와 다를 경우 감점 한다.

각종 개념도, 다이어그램 등은 자유롭게 표현이 가능하다. (단, 계획안 모형 사진의 사용은 불가)

각 제출도서 사이의 설계 내용은 차이가 없이 동일해야 한다.

설계도판

도판은 A1(가로 594mm × 세로 841mm) 2매로 작성하여 제출한다.

온라인 제출로 심사용 도판은 공모운영사가 일괄 인쇄

도판은 아래 내용을 담아 구성하며 도면의 축척, 사용 글꼴 및 표현 등은 응모자의 자율에 따른다.

건축개요 : 건축, 마감, 설비, 조경, 개요 등을 작성하고 설계안의 특징을 나타내는 개념 표기

조감도 및 투시도 (컬러 및 재료 표현 가능, 동일 컷 중복사용 가능)

배치도 : 시설배치, 도로, 녹지 및 이격거리에 대한 사항 등을 작성(컬러 사용 가능)

각층 평면도, 입면도(2면 이상), 단면도
※ 각 도면 축척을 확인할 수 있는 스케일 및 방위를 반드시 기입할 것.

프로그램 구성 및 동선 다이어그램
(자유 형식으로 각 기능을 연결하고 배치한 의도를 알기 쉽게 표현)

그 외 기타 자유 표현

도판 제출시, 도판별 파일 각 1개, 합쳐진 파일 1개로, 총 3개의 파일을 제출한다. (아래 참조)

도판1

(A1)

Pin-Panel1.pdf

도판2

(A1)

Pin-Panel2.pdf

도판1 (A1)	도판2 (A1)
Pin-Panel_merge.pdf

설계설명서

설계설명서의 내용과 순서는 첨부된 서식의 목차를 따르며, PDF로 변환하여 제출한다.

설계설명서는 표지와 목차를 제외하고 총 단면 5쪽 이내로 한다. (설계소묘 400~1,000자 내외)

심사 및 입상작 선정

사전기술검토

기술검토위원회에서 응모작품에 대한 관계법령, 공모규정 및 지침에 기초한 위반사항을 확인하고 계획의 실효성 등을 검토한 후 그 결과를 작성하여 심사 전 심사위원회에 보고 제출한다.

❙표5 기술검토 평가 시 고려사항(예시)

구 분	항 목	운영 규정
법규 위반	국토 계획법, 건축법, 주차장법, 장애인등편의법 및 기타 관계 법규의 주요 사항 위반 여부	- 제출된 모든 작품 대상으로 검토 - 검토 결과에 대한 기술검토서 작성 및 심사위원회 상정 - 심사위원회에서 기술검토 결과에 대한 본 심사 반영 기준 결정
지침 위반	익명성 위반 여부
	예정 공사비 초과
	지질, 규격 및 제본방법 미준수
	설계도서 기준매수 초과
	제출도서 누락
	그 외 지침서의 요구사항 위반 여부 등

심사위원회 구성 및 운영

심사위원회의 구성
심사위원회는 위원장을 포함하여 관련분야 전문가 등 5인의 심사위원과 2인의 예비심사위원으로 구성한다.

심사위원 명단

심사위원 : 강예린(서울대학교, PA), 김동일(경희대학교), 윤정원(서울시립대학교)
이은경(이엠에이건축사사무소), 이현호(홍익대학교)

예비심사위원 : 강현석(SGHS 설계회사)

심사위원회 운영 방법

심사위원회는 심사위원, 예비심사위원 등 최소 과반 이상 참석으로 개회한다.

심사위원장은 최초 회의에서 호선으로 심사위원장을 선출한다.

심사위원장은 설계공모 규정 및 심사위원들의 의견을 수렴하여 응모 작품 심사 및 선정을 위한 심사 규정을 정하여 심사를 진행하며, 심사위원회의 동의를 얻어 응모 작품 심사에 대한 심사방법 등 세부적인 사항을 결정할 수 있다. 또한, 심사위원들을 대표하여 심사결과 보고서를 작성하여 주최자에게 제출한다.

예비심사위원은 참석은 가능하나, 투표 및 심사권은 없으며, 발언 및 토론에 참여 할 수 있다. 단, 심사위원 부재 시 본심사위원이 된다.

심사 시 제출 내용에 대해서 참가자에게 전화로 질의 할 수 있다.

참가자는 ‘기피·회피·제척’의 사유가 있는 경우 신청서[서식 9]를 질의접수 기간 내에 제출할 수 있다.

심사의 절차 및 기준

심사방법

심사 시 기술위원회의 기술검토 결과인 기술검토서를 확인하여 심사 반영 여부를 결정한다.

작품토론 및 평가를 거쳐 심사위원 다수의 합의 도출을 원칙으로 당선작 및 입상작들을 선정한다.

심사위원은 당선작에 대한 평가사유서와 심사평을 작성하고 심사위원장은 최종 심사보고서를 작성하여 심사위원 전원의 서명을 받아 발주기관에 제출한다.

심사결과 응모작품 수준이 현저히 떨어진다고 판단될 경우, 입상작을 선정하지 않을 수 있다.

설계공모작품에 대한 심사과정에서 실격된 작품의 경우는 해당 사유, 기타 필요한 사항 등을 문서로 작성해야 하며, 심사에 참여한 심사위원 전원의 서명을 받아야 한다.

심사위원회의 진행은 실시간 공개로 진행되나, 심사위원회 회의를 통해 공개 범위를 정할 수 있다. (단, 전체 과정은 녹화가 진행된다.)
※ 녹화, 녹취 공개의 경우 열람 신청 후, 지정된 장소에서 볼 수 있다.

작품 평가 기준

심사위원회는 사전검토 결과에 대해 보고받아 토론을 통해 실격 또는 평가 반영을 결정한다.

심사위원회는 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정) 제20조에 따라 평가하며, 세부적인 사항은 심사위원회에서 결정한다.

평가방식은 투표제를 원칙으로 하되, 심사위원회 결정에 따라 채점제 또는 투표제와 채점제의 혼합방식 등을 적용할 수 있다. 다만, 어떠한 평가방식을 활용하든 심사위원은 반드시 공모안에 대해 충분한 토론을 거쳐 평가하여야 하며, 각 평가방식별 공모안의 평가사유서는 우수한 점과 개선사항 등을 심사위원별로 구체적으로 작성하여 공개한다.

채점제로 진행할 경우 세부평가기준 예시는 아래와 같다.

❙표6 일반 설계공모의 배점기준 및 평가항목(예시)

평가분야	중점평가 사항	비 고
배치 계획	੦ 시설 및 공간 이용의 편의성 ੦ 기존 시설을 고려한 증축부 배치의 효율성	(20)
공간 계획	੦ 내·외부 공간 계획의 적절성 ੦ 동선 및 기능배분의 타당성	(30)
주변 환경 및 경관과의 조화	੦ 색상 및 재료 계획의 적절성 ੦ 기존 건물 입면과 조화를 이루는 증축부 입면의 제시 ੦ 구조(내진)보강으로 인해 기존 건물 입면변경시 적절한 대안제시	(30)
공사비 적정성 및 기술 계획	੦ 환경친화적 설계기법의 우수성 ੦ 비용 절감 등 경제성 ੦ 건물 구조 및 공법 등의 우수성	(10)
기 타	੦ 재실중 공사를 고려한 안전성 확보 및 재실자 피해 최소화 방안의 제시, 공공성 제고방안 등 추가적으로 필요한 사항	(10)

실격 및 감점 기준

❙표7 실격 및 감점 기준

평가항목	세부사항
제출 도서의 규격을 현격히 위반한 경우	실격 (심사제외)
제출 시간 미준수
공정한 평가를 하는 데 영향을 미칠 정도로 불공정 행위를 한 경우
직간접적으로 심사에 영향을 미치는 부당한 청탁이나 압력을 행사한 경우
심사 전에 심사 관련자와 접촉하여 설명한 경우
제출한 서류 등에 허위 사실이나 과제 누락 등 중대한 미비 사항이 발견될 경우
공모 작성 일반사항 위반 시	심사시 감안
건축규모 기준 미 준수
예정공사비 기준 미 준수
제출물의 형식과 규격, 작성 기준 위반 시

당선작 및 입상작 선정

당선작 및 입상작 구분

당선작 및 입상작의 종류와 보상 내용은 다음과 같으며, 총상금 2,500만원 범위내에서 아래와 같이 지급한다.

구분	작품수	입상자 수에 따른 보상금액 비율
		2작품	3작품	4작품	5작품이상
최우수(당선작)	1	기본 및 실시설계 용역 계약체결 우선 협상권
우수작(2등)	1	보상총액1/3	40%	40%	40%
가작(3등)	1	-	30%	30%	30%
가작(4등)	1	-	-	20%	20%
가작(5등)	1	-	-	-	10%

※ 동순위자가 발생할 경우 보상금 = 동일점수 입상자의 보상금 합계/동일점수 입상자의 수

※ 참가 업체가 2개 이상이 되지 않을 경우, 당선안을 선정하지 않는다.

1등 당선자는 발주기관과 설계계약을 체결할 권한을 가진다. 수의시담은 진행하지 않는다.

심사결과, 공모 목적에 적합하지 않거나 작품수준이 현저히 떨어진다고 의결될 경우 당선작을 선정하지 아니할 수 있다.

사용권 및 저작권

제출물의 저작권은 참가자에게 있으며, 저작권의 귀속 등 저작권과 관련한 제반사항은 대한민국 저작권법령이 정하는 바에 따른다.

당선작 및 입상작에 대한 저작권은 저작권법에 따라 당선자에게 있다. 다만 발주청이 제출물을 보고서 또는 작품집의 출판, 전시 등에 사용하거나 신문, 방송, 인터넷 또는 기타 매체에 제공하는 등 비영리적 목적으로 사용하는 경우에는 별도 보상이나 협의가 없어도 참가자는 이를 허락한 것으로 본다.

참가자는 제출한 작품이 제3자의 지적재산권에 따른 배타적 권리를 침해하지 않음을 보증하여야 한다.(제3자의 지적재산권이 사용된 경우에는 그 제3자의 승낙서 등 사용 권한을 증명하는 자료를 첨부하여야 한다.) 지적재산권과 관련한 문제가 발생할 경우 모든 책임은 참가자에게 있으며, 당선작의 경우 입상이 취소될 수 있다.

계약에 관한 사항

일반사항

계약서는 대한민국 국내법에 따라 한국어로 작성한다.

발주청의 사전승인 없이는 계약의 모든 사항에 대하여 하도급계약을 할 수 없다.

당선자는 계약 시 대한민국의 관련 법률 규정을 준수하여야 한다.

발주기관은 심사위원회 보완 요구 등의 사유로 당선작의 수정을 요구할 수 있으며, 당선자는 그 적정성과 전체 작품의 개념을 현저히 훼손하지 않는다고 판단할 경우에는 협의 후 계약 내용에 반영하여야 한다. 단 설계변경의 범위에 따라 발주처가 적정한 대가를 지급한다.

당선자는 본 지침서의 내용을 계약이행 기간 동안에도 준수하여야 한다.

설계자가 지향하는 설계 의도를 정확하게 구현하도록 건축서비스산업진흥법 제23조에 따라 해당 건축물 건설 과정에 설계자가 참여하며, 이에 따른 용역비는 관계 법령에 따라 설계용역비와 별도로 산정하여 지급한다.

계약의 당사자 조건

당선된 후(계약 시), 대표자(당사자)는 건축사사무소 등록을 필하고 관계법령에 결격사유가 없는 자여야 하며, 공동수급자의 경우 계약 관련 법령 등에 의해 저촉되지 않아야 한다.

당선자는 심사위원회가 보완을 요구한 사항을 비롯하여 발주자가 요구한 사항으로서 설계 수정이 필요한 경우 이를 반영하여야 한다.

당선자는 해당 사업의 홍보를 위한 공모 결과 전시에 적극 협조 하여야 한다.

당선작 설계자의 의무

당선자는 정부의 기본방침 또는 시행기관의 운영 방침이 변경되어 설계의 전면적인 취소 또는 설계 내용의 부분적인 수정이 필요할 경우 이에 응해야 한다.

설계 용역의 계약은 대한민국 관계 법령 및 발주기관 제규정에 따르며, 중간 및 실시설계와 이에 부수되는 인허가 수행을 포함한다.

당선자는 본 사업과 관련된 발주청의 업무 수행 시 발주청의 요청에 대한 각종 자료를 작성·제출하는 등 발주청의 업무 수행에 적극 협조하여야 한다.

당선자는 계약 후 설계 용역 수행 시 각종 법령에서 정하는 건축, 구조, 토목, 기계, 전기, 통신, 소방, 조경 등 기본 및 실시설계와 설계자문, 계약심사, 경관자문, 건축협의(건축물대장 생성 등), 예비인증(장애물 없는 생활환경 인증, 건축물 에너지 효율등급 인증, 제로에너지 건축물 인증 등), 신재생에너지 및 발주기관이 요구하는 각종 보고자료 등 이에 수반되는 용역 전반에 관한 사항과 행정절차에 필요한 자료작성 일체 업무를 자기 부담으로 이행하여야 하며, 발주청이 이를 이행하는 경우 필요한 자료제출 등 업무 수행에 협조하여야 한다.

설계 진행

당선자는 진행과정 별로 발주기관과 협의하여 설계를 추진하여야 한다.

당선작의 계획안이 예정공사비 범위를 초과할 경우 당선자는 설계를 변경 할 의무를 가진다.

과업수행 중이라도 발주기관의 계획 변경, 심의 미통과, 기타 불가피한 사정 등으로 인해 설계용역을 진행하기 어렵다고 판단 될 경우 본 과업의 일부 또는 전부를 중지하거나 과업의 범위를 조정, 변경 또는 계약을 해지할 수 있으며, 이 경우 ‘정부 입찰 및 계약집행 기준’ 등 관련 규정에 따른다.

무효 및 승계

다음의 경우에는 당선자에게 부여하는 설계권을 무효로 하며, 차순위자 순으로 승계하며 이 경우 계약을 체결한 차순위자는 수령 상금을 반환하여야 한며, 발주기관은 반환된 상금을 최초 당선자(우선협상 대상자)에게 지급한다.

당선자가 설계권을 포기한 경우

당선작에서 실격에 해당되는 사실이 발견된 경우

당선자가 법령, 기타 사유로 원활한 설계 작업이 불가능하게 된 경우

소정의 기한 내(계약요구일부터 30일)에 계약체결이 이루어지지 않는 경우
(단, 발주청이 인정하는 부득이한 사유가 있는 경우에는 그러하지 아니한다.)

기타사항

규정의 준수

참가자는 설계공모에 등록함으로써 본 규정을 준수하는 것으로 간주되며 이 규정을 위반한 참가자는 설계공모 참가자격을 상실하게 된다.

기타 본 규정에서 명시하지 아니한 사항은 「건축 설계공모 운영지침」(국토교통부고시 제2023-180호, 2023. 3. 30. 일부개정)을 준용한다.

당선자에게 실격사유가 발견된 경우 계약 체결 전에는 당선을 무효로 하고 계약체결 이후에는 체결된 계약을 무효로 하며 해당자는 민·형사상의 책임을 진다. 기타 입상작의 경우에는 입상을 무효로 하며 입상자는 지급받은 보상금을 전액 반환하여야 하고 민·형사상의 책임을 진다.

공모기간 중 제공하는 과업내용서(안)에는 추후 당선자가 계약 후 이행해야 할 과업 내용을 포함하고 있고 응모자는 반드시 이 내용을 숙지하고 공모에 참여해야 한다. 응모 작품을 제출함으로써 과업 내용을 이행할 것에 동의한 것으로 간주한다. 제공한 과업내용서(안)에 제시한 시설 규모는 당선안에 따라 바뀔 수 있다.

작품의 반환 및 처리

제출물은 모두 온라인 제출로 별도의 반환 과정은 없다.

입상작 이외의 제출작도 작품집, (온라인)전시, 서울대 아카이브에 활용 될 수 있으며, 이는 공모에 참여함으로써 동의 한 것으로 간주 한다.

설계지침

대상지 현황

대상지 현황

위치도

※ 5동의 2층 레벨과 6동 및 7동의 1층 레벨이 동일 레벨에 있음.

기본방향

공간 활용성 확보

- 공간 연속성과 확장성, 동선효율을 고려해 계획

- 향후 다양한 변화에 대응할 수 있도록 계획 수립 필요

교육 및 연구공간 시설기준을 충족하는 계획 수립

- 학내연구과제 ｢공과대학 강의실 기본 강의설비 기준 개발｣(연구책임자: 건축학과 조항만 교수) 의 강의 공간 및 설비에 대한 가이드라인을 참고하고 인문대 실정에 맞게 준용하여 설계

- 장애가 없는 생활환경, 유니버설 디자인 가이드라인을 준용하는 설계

기존 건물과의 조화 및 주변 환경의 보존

- 「서울대학교 캠퍼스 마스터플랜 2022-2026」을 준용하며, 기존 건축물 및 인접건축물과의 볼륨과 높이를 고려하여 주변 경관과 조화를 이루는 계획 수립

- 기존 건물, 시설, 수목 및 녹지의 피해를 최소화하는 계획 수립

- 기존 시설과 수직 동선을 고려하여 코어, 연결로 및 출입구 계획 수립

계획 범위 및 내용

스페이스 프로그램(안)
아래에 제시하는 시설별 면적 기준 각 실별 면적은 ±10%이내 면적을 변경 할 수 있다.

유형		수용인원	기준면적	합계면적	비고
인문대 도서관 (5동 5층)	대형세미나실	100	50㎡	150㎡
	소형세미나실		20㎡	120㎡
	행정실		60㎡	60㎡
	열람실		300㎡	600㎡
	공용공간		360㎡	360㎡	홀, 로비, 복도, 화장실, 휴게공간 등 포함
소계				1,290㎡
인문학연구원 - 라틴아메리카 연구소 소속 HK교수연구실 - 기타연구공간 (6동 5층)	교수연구실1	70	20㎡	120㎡
	교수연구실2		25㎡	125㎡
	연구원1		40㎡	80㎡
	연구원2		50㎡	100㎡
	라운지/탕비실		50㎡	50㎡
	휴게실		20㎡	20㎡
	공용공간		250㎡	250㎡	홀, 로비, 복도, 화장실, 휴게공간 등 포함
소계				745㎡
대학원 연구실 (7동 5층)	대학원생연구실(소)	150	20㎡	320㎡
	대학원생연구실(대)		50㎡	350㎡
	세미나실		60㎡	60㎡
	라운지/탕비실		100㎡	100㎡
	공용공간			370㎡	홀, 로비, 복도, 화장실, 휴게공간 등 포함
소계				1,120㎡
연결로				69.8㎡
합계				3,224.8㎡

- 교수연구실, 대학원생연구실, 연구원 유닛 면적은 추후 수요에 따라 조정 예정이다.

- 6동과 7동 증축구간은 같은 층에서 연속하므로 조닝과 실별 면적 할당시 참고하여야 한다.

- 공간계획(안)은 계획방향을 제시하기 위한 것으로, 기본 및 실시설계 단계에서 협의에 따라 변경될 수 있다.

분야별 설계지침

공통사항

분야별 계획은 상호간 연계성을 확보하여 효율적이고 통합적인 계획이 수립될 수 있도록 한다.

분야별 계획은 관련 법령 및 규칙 등 제반 규정에 적합하도록 한다.

「서울대학교 캠퍼스 마스터플랜 2022-2026」을 준용하여 계획한다.

본 건물의 증축공사는 학내구성원이 기존 건축물을 사용하는 상태(구조보강공사기간 제외)에서 진행해야 함에 따라 이를 고려한 설계 및 공사비를 반영 해야 한다,

허가조건과 별개로 BF(Barrier Free)인증을 받아야 함에 따라 증축부 뿐만아니라 기존건물의 장애인편의시설 보완계획을 반영해야 한다.

설계 중 사업진행 방식이 변경(3 개동 동시 착공 → 각 동별 순차적 착공) 될 수 있으며 이 경우 당선자는 사업진행 방식에 맞추어 설계도서를 조정하여야 한다.

건축

인문대학 증축공간은 시대적 요구에 부응하는 첨단 교육/연구 환경 제공에 적합하도록 계획하여야 한다.

향후 변화하는 환경에 대응할 수 있도록 확장성, 융통성, 전환성이 가능한 건물이 되도록 계획한다.

공간계획(안) (Space Program)은 각 실에 필요한 기본적인 공간만을 제시하였으므로 설계 시 순사용 면적과 기구의 배치 및 기타사항과 제시된 부대시설의 기능을 고려하여 실의 기능에 부합되도록 계획한다.

인문대 도서관은 도서관 설계의 일반사항을 반영하되, 인문대학 교육/연구 방식 및 장서의 특징을 반영하여 계획한다.

교육시설의 환경을 우선적으로 배려하고 강의 좌석 전체에서 노트북 사용이 가능하도록 계획한다.

환경친화형 건축 설계를 적용하고, 건축물의 에너지절약과 쾌적한 환경 조성을 위하여 각종 환경 조절 시스템과 설비시스템이 최적화 되도록 한다.

에너지 절약을 위하여 고효율 건축물이 되도록 설계에 반영한다.

장애인 편의시설을 설치하여 이동권 보장과 시설 이용에 불편이 없도록 한다.

건물 바닥 및 내부 마감은 내구성 및 안전성이 확보된 마감재, 각실 및 복도의 바닥재는 소음을 최소화 할 수 있는 제품을 사용하여야 한다.

비상 상황 발생 시 안전하고 신속한 대피가 가능한 계획을 수립하고, 분야별 소방 및 방재계획과 연계한다.

차량과 보행동선의 간섭을 최소화하고, 녹지공간이 보행동선과 적절히 조화를 이룰 수 있도록 계획한다.

기존 지형, 기존 진입로, 주변 건물 및 현황을 고려하여 합리적으로 계획한다.

경제적이고 친환경적인 재료를 사용하되 내구성, 경제성 등 안전성과 시공성이 용이하고 미관 및 기능적인 면에 부합되는 재료를 선택한다.

창호는 에너지절감 및 방음, 방법, 기밀성을 충분히 확보하도록 계획한다.

구조설계는 관련 법령에 적합하게 설계하고 시공성 및 경제성 등을 고려하여 계획에 반영한다.

구조설계시 증축으로 인한 하중 증가를 고려하여 기존건물 구조보강(연진보강 및 내진보강) 계획을 세워야 하며 [1개층 증축을 고려한 안전진단보고서]를 참고하여 증축에 의한 하중영향을 사전에 검토하여 공모에 참여해야 한다.

※ 태양광패널, 실외기 등으로 건물 최상층부 하중은 추가 될 수 있음.

또한, 구조보강으로 인해 기존건물의 외부 입면에 변경이 생길시 주변경관과의 조화를 고려해 입면계획을 세워야 한다.

증축되는 5층을 기존 4층과 동일하게 반복하는 쌍처마 형태는 가급적 지양한다.

토목 및 조경

시설의 용도, 규모 및 입지조건을 충분히 파악하여 효율적 대지 이용에 적합하며, 주변 환경과의 조화를 고려한 계획을 수립한다.

계획대지 조성 시 기존 지형 여건을 고려하여 경제적이고 환경 친화적인 계획을 수립한다.

조경계획은 지형, 기후, 토양 특성을 고려하여 수립하되 관련 법규 및 규정에 적합하도록 조경계획에 반영한다.

옥상정원을 계획에 포함하여 친환경적 학습․연구․휴게 영역을 제공하고 필요에 따라 다양한 활용이 가능하도록 계획한다.

전기설비

에너지이용 합리화법에 의해 고효율에너지 기자재를 사용한다.

비상시 비상전원은 무정전 시스템(방송 및 비상조명)을 구성한다.

조명설비는 각 호실의 용도 및 위치에 따라 자연채광을 최대한 이용하고 현관로비, 휴식 공간 등은 실내 장식에 맞게 간접조명 및 기타 경관조명을 부분적으로 설치한다.

모든 공간은 일정시간 지나면 전원이 자동적으로 꺼질 수 있는 시스템을 구현하여 에너지 절감 계획을 적용한다.

모든 세미나실은 프로젝터 및 스크린 혹은 전자칠판을 설치한다.

A/V시설은 각 호실 크기 및 용도에 적합한 제품, 모양, 성능 등을 고려하여 설치한다.

모든 실에 전화, 인터넷 사용이 가능하도록 한다.

기계설비

에너지 절약 정책과 환경오염 방지를 위한 관련정책을 적극 수용하고 타 공정과 관련되는 사항을 면밀히 검토하여 설계에 반영한다.

교육 연구시설에 적합한 기계설비 시스템이 되도록 하며, 연중 운영 및 시설 안정이 우선 확보되도록 설계 반영하고, 또한 유지관리 및 보수가 용이하도록 한다.

냉․난방설비 등 자동제어는 실별 및 중앙 조절이 가능하도록 하여 효율적인 관리 및 인력 절감을 도모할 수 있도록 계획한다.

강의실 및 공간의 특성을 고려한 환기 및 냉난방을 계획하여야 한다.

주요 설비 및 장비의 선정은 초기투자비, 유지관리비, 내용연수 등을 비교 분석하여 효율적이고 경제적인 설비계획이 되도록 한다.

에너지절약형으로 설계되어야 하며, 고효율 에너지자재 및 절수형 수도설비를 사용하여야 한다.

중형․ 대형강의실은 공간의 크기 및 소음 등을 고려하여 설비를 계획한다.

소방 및 안전 계획

소방시설은 소방관계법령에 적합한 초기 화재감지, 초기 화재진압, 화재  피해의 최소화, 화재발생 및 확산방지, 화재로부터 인명 및 시설물 보호를 최우선적으로 고려하여 계획한다.

방재설비는 건축방재와 기계 및 전기 방재계획이 유기적으로 감시, 제어될 수 있는 시스템으로 계획한다.

정보통신 계획

각 실별로 필요에 따라 충분한 전산망 및 무선랜 회선을 확보한다.

건물 내 출입자, 출입시간 등을 통제할 수 있는 보안시스템을 갖춘다.

건물 내 복도 및 주차장 등에 CCTV를 설치하여 도난 및 안전사고를 방지할 수 있게 하며, 인문대학에서 추진 중인 무인경비시스템과 호환될 수 있게 설비한다.

향후 정보통신설비의 증설 및 신기술 도입 시 대처가 가능하도록 계획한다.

대형강의실은 영상강의의 송수신이 가능하도록 필요 공간 및 관련 설비를 구축한다.

환경 계획

환경 친화적인 캠퍼스 조성을 위해 주변 지역과 조화를 이룰 수 있도록 주변 환경공사를 고려한다.

건물 주변의 현존 수목들을 최대한 보호하여 계획에 반영한다.

효율적인 에너지 절약 설비를 선정하여 친환경적인 건물로 계획한다.

정보화 계획

개별 실뿐만 아니라 로비 및 휴게 공간 등에도 전산망 이용에 불편함이 없도록 유·무선 설비를 갖추고 주요 각 실에서 편리하게 전산망을 사용할 수 있도록 한다.

네트워크 시설(케이블 및 장비 등)은 서울대학교 관악캠퍼스 실정에 맞게 중앙전산원과 사전에 협의한다.

※ 분야별 계획 전체의 내용은 기본 및 실시설계 단계에서 협의를 통해 변경 및 추가될 수 있음.

공모 참가자 제공 자료

사업범위 도면

기존건물 도면

주변건물 도면

수치지형도

세부시설 조성계획 관련 자료

1개층 증축을 고려한 안전진단 결과 보고서(서울대학교 인문대 5동 등 4개동 안전진단 및 증축검토 용역 보고서)

마스터플랜

※ 제공자료는 공모 참가 신청자에게만 공모용으로 제공되며, 공모 종료 이후 삭제 함을 원칙으로 한다. 이는 공모에 참여함으로써 동의한것으로 간주한다.

※ 기획설계자료는 다양한 건축안 제안을 위해 별도 공개 하지 않는다.